UNIST 사업실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2016-12

담당부서

작성자

행정처 시설팀

(이광민/052-217-1207/

lkm@unist.ac.kr)

사 업 명

미래형이차전지 산학연 연구센터 설립

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경 : 이차전지 중점 연구분야 활성 및 특화시설건립

○ 추진기간 : ‘14년 3월 ~ ’16년 10월

○ 총사업비 : 8,000백만원 (2016년)

○ 주요내용

- 이차전지 전용 특수실험실 및 연구공간 신축(연면적 6,363.88㎡)

○ 추진경과

- ‘14년 3월 : 이차전지 산학연 연구센터 사업예산 확보

- ‘14년 3월 : 세부내용 확정 및 스페이스 프로그램 조정

- ‘14년 7월 : 현상설계 공모 시행

- ‘15년 1월 : 실시설계 완료 및 공사발주(장기계속공사)

- ‘15년 3월 : 1차공사 착공

- ‘15년12월 : 1차공사 준공 및 2차공사 계약

- ‘16년 1월 : 2차공사 착공 후 진행 중

- ‘16년 10월: 준공예정

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 에너지 및 화학공학부 학부장 조재필

- 최종 결재자 : 총장 조무제

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
행정처장	박주헌	책임행정원	‘14.3월~현재	건립 업무 총괄
연구처장	조재필	교수	‘14.3월~현재	이차전지 연구 총괄
시설팀장	이강복	책임행정원	‘14.3월~현재	건립공사 업무 조정
시설과장	한창훈	책임행정원	‘14.3월~현재	건립공사 확인․조정
전기담당	김준모	선임행정원	‘14.3월~현재	전기공사 담당
건축담당	이광민	선임행정원	‘14.3월~현재	건축공사 담당
기계담당	정문호	전문계약직	‘14.3월~현재	기계공사 담당
토목담당	강승원	전문계약직	‘14.3월~현재	토목조경공사 담당
통신담당	신홍승	전문계약직	‘14.3월~현재	통신공사 담당
연구담당	정양재	선임행정원	‘14.3월~현재	이차전지 연구담당

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계사

- (주)정림건축종합건축사사무소

○ 시공사(공동도급)

- (주)성지건설 51%

- (주)삼영종합건설 49%

○ 감리사

- 임채룡건축사사무소

- (주)동남종합감리공단건축사사무소

추진실적

○ ‘14년 10월 : 현상공모를 통한 설계사 선정(정림건축)

○ ‘15년  1월 : 실시설계 완료

○ ‘15년  3월~’16년 3월 : 공사 진행 중

(52.21% 공정율_‘16년 3월말 기준)