실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

담당부서

작성자

UNIST 안전팀

배진모/052-217-1541

jinmo@unist.ac.kr

정 책 명

UNIST Safe Campus 운영

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

과학기술원 연구실 내에서의 안전 환경조성, 연구인력     인명 및 유･무형 재산 보호

○ 추진기간 : 2020.01 ~ 2020.12

○ 총사업비 : 984.16백만원

연번	사업명		소요예산
1	가스캐비닛 구매, 설치	설계비	9.00 백만원
		캐비닛구매	396.51 백만원
		전기공사	9.44 백만원
		부대비	3.32 백만원
		소 계	418.27 백만원
2	울주학사 화재수신기 교체, 중계기 및 네트워크 통합	설계비	4.95 백만원
		공사비	73.00 백만원
		부대비	0.88 백만원
		소 계	78.83 백만원
3	재정시설 CCTV 통합관제 시스템 구축		364.72 백만원
4	비상대피 안내도		1.82 백만원
5	생활관 CCTV설치		7.92 백만원
6	재정 연구센터 수신기 교체		33.99 백만원
7	소방점검 지적사항 보완		13.43 백만원
8	특수건강검진 비용		2.80 백만원
9	연구실폐기물 위탁비		27.40 백만원
10	열화상 카메라 설치		30.00 백만원
11	할로겐소화기 등 구매		4.98 백만원
합 계			984.16 백만원

○ 주요내용

1. 가스캐비닛 구매:

특정고압가스(가연성/독성) 누출예방 및 안전캐비닛 구축

2. 울주학사 화재수신기 교체 등:

UNIST 내 전체 소방수신기시스템 통합으로 안정성 확보       및 효율적 관리

3. 재정시설 CCTV 통합관제 시스템 구축:

건물별 분산 운영중인 CCTV의 통합모니터링 시스템을

도입하여 교내 생활안전 사고에 신속히 대응

4. 비상대피 안내도:

비상 시 안전한 대피를 위해 재정건물 내 각층 비상대피

사인물의 규격을 확대하여 사용자 시인성 개선

5. 생활관 CCTV설치:

인력의 부재에 따른 외부인 출입 등 감시체계 보완

6. 재정 연구센터 수신기 교체:

BTL건물과 재정건물의 화재수신기 간 상호통신 및 통합관제, 노후화로 인한 고장문제 해결

7. 소방점검 지적사항 보완:

2020년 소방시설 작동기능점검 지적사항에 대한 시정보완 조치명령 사항 시정조치

8. 연구실안전법을 준수하고 연구활동종사자의 유해인자

노출에 따른 건강상태와 직업병을 사전에 예방하기 위함

9. 과학기술원 연구실 내에서의 안전 환경조성 및 쾌적한

연구공간 확보

10. 원내 코로나19 발생감시 및 대응을 위한 열화상카메라 설치

11. 과학기술원 연구실 내에서의 안전 환경조성, 연구인력

인명 및 유･무형 재산 보호

○ 추진경과

1. 가스캐비닛

2020.03.24.~2020.08.20. : 가스캐비닛사업 설계용역

2020.11.11. : 가스캐비닛 설치 착수

2020.12.31. : 가스캐비닛 설치 완료

2. 306동 생활관 CCTV 설치공사

2020.11.18. : 공사착공

2020.11.25. : 공사준공

3. 울주학사 화재수신기 교체 중계기 및 네트워크 통합 외 1건

2020.11.06.~17.(12일간) : 설계용역

2020.12.29. : 공사계약 및 착공

2021.02.26. : 공사준공

4. 재정시설 통합관제시스템 구축

2020.12.18. : 물품계약

2020.12.28. : 물품착수

2021.02.16. : 물품완료

5. 비상대피 안내도

2020.12.01. : 용역계약

2020.12.10. : 현장조사 및 제작시안 착수

2020.12.29. : 용역준공

6. 수신기 교체(103동, 105동)

2020.03.24. : 공사계약 및 착공(103동)

2020.05.07. : 공사준공(103동)

2020.09.15. : 공사계약 및 착공(105동)

2020.10.27. : 공사준공(105동)

7. 소방점검 지적사항 보완

2020.09.15. : 공사계약 및 착공

2020.10.27. : 공사준공

8. 특수건강검진

2020.10. ~ 2020.11. : 연구활동종사자 특수검진 용역 발주

2020.12. : 연구활동종사자 특수건강검진 시행

2020.12.30 : 특수검진 유소견자 추가검진 시행

9. 연구실 폐기물 위탁비

2020.09.20. ~ 10.21. : 연구실폐기물 위탁처리

2020.10.6. : 재정사업 연구동 수집운반 용역정산

2020.10.13. : 3분기 장기미사용 시약,화학물질 위탁

10. 열화상 카메라 설치

2020.9.3. : 구매 계획안 보고

2020.9.4. : 구매계약 및 설치완료

11. 할로겐소화기 등 구매

2020.12.21. : 제품 구매 (소화기, 장갑)

2020.12.29. : 제품 확인

2020.12.30.~ : 연구실별 소화기 분배

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

연번	사업명		입안자	결재자
1	가스캐비닛 구매, 설치	설계	정문호	남한석
		캐비닛구매	정문호	이재용
		전기공사	조용훈	노승훈
2	울주학사 화재수신기 교체, 중계기 및 네트워크 통합		김용대	노승훈
3	재정시설 CCTV 통합관제 시스템 구축		김용대	이재용
4	대피장소 안내표지판		이광민	김준모
5	생활관 CCTV설치		김용대	노승훈
6	재정 연구센터 수신기 교체		조용훈	노승훈
7	소방점검 지적사항 보완		조용훈	노승훈
8	특수건강검진		이동찬	배진모
9	연구실 폐기물 위탁비		이동찬	배진모
10	열화상 카메라 설치		표효빈	노승훈
11	할로겐 소화기 등 구매		김정우	배진모

○ 사업 관련자 (시설팀)

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담내용)
총괄	김준모	팀장	’20.01～’20.12	시설분야 총괄
총괄	배진모	팀장	‘20.01~’20.12	안전분야 총괄
담당	이광민	팀원	’20.01～’20.12	대피 안내표지판
담당	한지우	팀원	’20.10～’20.12	가스캐비닛
담당	정문호	팀원	’20.01～’20.10	가스캐비닛
담당	조용훈	팀원	’20.01～’20.12	캐비닛, 소방시설, 수신기 (전기)
담당	김용대	팀원	’20.01～’20.12	CCTV, 수신기 (통신)
담당	이동찬	팀원	’20.09～’20.12	폐기물,건강검짐
담당	표효빈	팀원	’20.09～’20.09	열화상카메라
담당	김정우	팀원	’20.12～’20.12	할로겐소화기

다른기관

민간인관련자

해당사항 없음

추진실적

1. 가스 캐비닛

3개학부 7개 연구실 11개 특정고압가스 조치 완료

학과	안전조치수		비교
	독성	가연성
신소재	0	2	1BTL(2EA)
에너지화공	1	2	1BTL(3EA)
자연과학	1	5	1BTL(2EA), 3BTL(4EA)
총 대수	11		1BTL(7EA), 3BTL(4EA)

※ 3BTL은 하나의 캐비닛 내에 3개의 가스실린더가

들어가는 장치를 뜻함.

2. 울주학사 화재수신기 교체 중계기 및 네트워크 통합 외 1건

- 목 적: UNIST 내 전체 소방수신기 시스템 통합으로 안정성 및 효율성 관리

- 사업내용: 울주학사 수신기 교체, 123동 중계반 신설, 재정 소방수신기 통합

3. 재정시설 CCTV 통합관제시스템 구축

- 목 적: 건물별 분산 운영중인 CCTV로 인하여 기능적·공간적으로 비효율성이 발생하는 바 통합모니터링 시스템을 도입하여 교내 생활 안전사고에 신속히 대응

- 사업내용: 103동(첨단소재연구관)지하1층 방재실, 101동 1층 MDF실에 영상감시장치,통신소프트웨어, 모니터링 PC, 네트워크스위치 설치 (사물함 등 집기포함)

4. 비상대피 안내표지판 규격 확대 개선

- 목 적: UNIST 시설물 내 비상대피사인물 의 규격 확대 설치

(20년도 국가안전대진단 권고사항 개선)

- 사업내용: 재정시설 건물 10개동, 42개소 제작설치

5. 306동 생활관 CCTV 설치 공사

- 목 적: 3차 생활관 경비인력 감축에 따른 306동 CCTV증설 및 보안강화

- 사업내용: 3차 생활관 306동 1,2층 주출입문 방향에 4대 설치, 307동 관제실에 영상녹화장비(NVR) 설치하여 모니터링

6. 재정연구센터 수신기 교체

- 목 적: UNIST 재정사업 시설 내 소방 수신기 노후로 인한 교체

- 사업내용: 103동 수신기 교체, 105동 수신기 교체

7. 소방 작동점검 지적사항 보완

- 목 적: 소방 작동기능 점검 결과 조치사항 보완공사

- 사업내용: 재정시설의 소화설비, 피난설비, 경보설비,

방화문 등 소방시설 작동기능의 개선

8. 연구활동종사자 특수건강검진 유소견자 추가검진

- 대상자 : 1차 검진후 유소견 54명

구 분	검진대상자	검진비용(천원)
특수검진	54	2,800
총 계	54	2,800

9. 연구실 폐기물 위탁처리

구 분	2단계 BTL(천원)	재정 사업(천원)	비고
의료폐기물	2,377	2,613
연구실 폐액	4,966	3,135
지정폐기물	3,366	3,300
수집운반	-	3,587
장기미사용	4,054
총 계	27,398

10. 열화상 카메라 설치

- 각 건물 주요 출입구 1인측정 열화상 카메라 설치(총 12대)

11. 할로겐 소화기 구매

에너지화학공학과 연구실 46개소 할로겐화합물 소화기

분배 완료 및 코팅장갑 구매